공약분야	경쟁력있는 관광자원 확충	남대천 생태휴식공간 조성
관리번호	38

신규여부	계속	총사업비 (백만원)	계	국비		도비		군비		민자 등
완료시기	임기내		3,000	0		1,950		1,050		0
사업기간	2021~2024	중앙정부 도움필요성		해당없음
사업주체	의성군 (환경축산과)	추진상황	완료		담당자				전화		6181

현황 및 정책목표

○ 현황: 방치된 남대천 일대를 생태휴식공간으로 조성

○ 정책목표: 경관개선 및 자연과 함께 쉴 수 있는 공간 조성으로 지역주민에게 환원

정책개요

○ 위    치 : 의성읍 팔성리 1-11번지 일원

○ 기    간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)

○ 총사업비 : 3,000백만원(도 1,950, 군 1,050)

○ 최종목표 : 생태휴식공간조성 31,472㎡

재원확보(예산확보) 계획

			(단위 : 백만원)
구 분	계	기투자 (~2022년 상반기)	임기 내 투자					2027년 이후	비고
			2022년 하반기	2023년	2024년	2025년	2026년
계	3,000	948	0	2,052	0	0	0	0
도 비	1,950	616	0	1,334	0	0	0	0
군 비	1,050	332	0	718	0	0	0	0

재원확보(예산확보) 실적

					(단위 : 백만원)
구 분	계	기투자 (~2022년 상반기)	2022년 하반기	2023년	비고
계	3,000	948	0	2,052
도 비	1,950	616	0	1,334
군 비	1,050	332	0	718

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
생태휴식 공간 조성	1식	100% (생태휴식 공간조성)	40% (설계완료 및 1차분 공사)	86% (2차분 공사 및 준공 )	100% (추가공사 준공)	-	-

추진실적

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행률 (%)
생태휴식 공간 조성	1식	100% (생태휴식공간조성)	40% (설계완료 및 1차분 공사 준공)	86% (2차분 공사 및 준공)	100% (추가공사 준공)	-	-	100%

세부추진실적 및 계획

연도	월	추진실적 및 계획
2021	3~12	기본 및 실시설계, 소규모환경영향평가 완료
2022	1~3	관련기관 협의 실시설계 완료 및 원가심사(道)
	4~5	공사 발주 및 착공
	6~12	1차분 공사(관수시설 및 부지정비, 전기 기초공사)
2023	3~12	2차분 공사(수목 및 잔디 식재, 산책로(맨발, 마사토) 정비, 세족시설, 파고라, 플랜터, 가로등 설치 등) 준공
2024	7~9	추가공사(관목 식재, 배수로 정비, 정원등 설치, 해충포집기 설치 등) 준공

기대효과

○ 대상지 주변에는 다양한 수생생물이 서식하고 있으며 구봉공원, 구봉산, 의성둘레길 등 다양한 생태관광자원과 연계 가능

○ 생물다양성 확보, 다양한 생태체험, 휴식·휴양의 장소 제공으로 지역주민의 건전한 여가문화 증진 및 건강한 삶의 질 향상에 기여